인천광역시 남구 자전거이용 활성화 계획

2011. 12

	인천광역시 남구

1. 과업의 개요

● 과 업 명 : 인천광역시 남구 자전거이용 활성화계획

● 과업목적

- 자전거 이용활성화를 위한 자전거도로 등의 인프라 구축 계획 수립

- 인천광역시, 인접지역과의 자전거 연계도로 구축으로 이용편의 도모

2. 과업의 범위

● 공간적 범위 : 인천광역시 남구 전역 및 구계 인접지역

● 시간적 범위 : 기준년도-2010년, 목표연도-2012년~2016년(5개년)

3. 자전거도로 및 시설현황

● 자전거도로 연장 : 총 54.61km

1) 자전거보행자겸용도로 : 51.64km

2) 자전거전용도로 : 2.97km

- 매소홀로(2.46km), 예술로(0.51km)

- 두산위브아파트개발(학익동)에 따른 자전거전용도로 0.61km 포함

● 자전거 보관소 : 55개소, 1,095대

- 역사 468대, 학교 205대, 관공서 112대 등

● 자전거 공기주입기 : 8개소, 9개

- 관공서 4개소, 학교 3개소, 문화시설 1개소

자전거도로현황

자전거보관소현황

자전거공기주입기현황

4. 문제점

문 제 점		내 용
	자전거도로 연계미흡	자전거도로간 단절로 이용률 저하
	자전거도로 미설치	자전거 전용도로 및 자전거보행자겸용도로 미설치에 따른 이용율 저하
	도로지장물에 따른 통행불편	자전거보행자겸용도로상에 노상적치물 및 불법주차등으로 이용자 통행불편
	자전거 횡단로 미설치	보행자와 상충가능성 내포 및 자전거이용자들간 통행 혼란야기
	안내표지판 정비 미흡	자전거 표지판, 노면시설 등 안내시설 정비 체계 미흡
	안전시설 설치 미흡	자전거 도로변 주변으로 가드펜스설치가 미비하여 자전거와 차량간의 안전사고 위험 내재
	자전거보관소 부족	자전거보관소 부족으로 노상방치 및 도난우려
	자전거도로상 불법주정차	자전거도로상 불법주정차로 통행 불편 및 사고위험
	자전거도로폭 협소로 인한 자전거 통행불편	자전거도로폭 협소로 통행불편 및 보행자와 상충사고 내재
	레져․여가형 자전거 도로의 부족	레져 및 여가형 자전거 도로 부족으로 자전거 이용률 저하

5. 자전거이용 활성화 계획 목표

6. 자전거도로 기본계획

● 자전거도로 구상방향

- 「인천광역시 자전거 이용시설 기본계획 재정비」상 남구의 자전거

계획도로(20m초과 도로, 총연장 130.6km)와 현황 자전거도로와의

연계성 고려

- 국지도로(12m~20m이하) 대상

- 지역별 통행특성에 따른 권역별 자전거도로 계획 수립

구 분	권역별 해당동	비 고
제1권역	도화1동, 도화2·3동, 숭의1·3동, 숭의2동, 숭의4동, 용현2동, 용현3동	북서지역
제2권역	주안1동, 주안2동, 주안4동, 주안5동, 주안6동	북동지역
제3권역	학익1동, 용현5동	남서지역
제4권역	학익1동, 학익2동, 용현1동, 용현4동, 주안7동, 주안8동, 문학동, 관교동	남동지역

7. 자전거 이용 활성화 방안

● 편의시설 확충

1) 자전거보관소 설치계획 : 41개소, 410대

- 생활권 단위의 근거리 자전거 통행의 활성화 도모

- 자전거보관소가 미설치된 관공서 및 학교를 중심으로 설치

2) 자전거 공기주입기 설치계획 : 26개소, 31개

- 자전거 통행수요가 많을 것으로 예상되는 역사 및 주민센터 등에

설치하여 자전거 이용자의 편의 도모

3) 산악자전거 노선계획 : 2개노선, 총 6.52km(남구:4.62km, 연수구:1.9km)

- 문학산의 산악자전거 이용객 증가추세, 자전거레져 위한 코스 정비

4) 자전거쉼터 계획 : 2개소

- 버스정류장 쉘터를 활용한 자전거도로 오르막구간내 간이쉼터 계획

자전거보관소계획

자전거공기주입기계획

산악자전거 노선계획
내용	• 문학산 산악자전거코스 : 2개노선 총 6.52km(남구 : 4.62km, 연수구 : 1.9km) • 노선1(4.28km) : 백학초등학교 □ 옥련여자고등학교 • 노선2(3.30km) : 백학초등학교 □ 희영무지개아파트 • 시설 정비 - 시․종점부 자전거보관소 각 10개소, 공기주입기 각 1개소 - 안내시설 및 도로 정비

자전거쉼터 설치계획
구 분	계 획 내 용
자전거 쉼터 배치 대상 도로	• 주간선도로상 자전거 도로(경원대로, 미주홀대로)
자전거 쉼터 배치 장소	• 비용대비 효과를 고려한 자전거 쉼터 설치 • 경사로상 버스정류장 쉘터가 설치된 지점 - 쉘터 공간을 활용한 자전거 이용자의 휴식공간 제공
자전거 쉼터 내 부대시설	• 자전거 거치대, 자전거 공기주입기

● 홍보활동 : 남구자전거 홈페이지 구축

● 교육활동 : 자전거 교육시설 설치계획

- 남구 중앙어린이교통공원내 설치

- 자전거 교육을 통한 이용수요 증대 및 안전의식 고취로 사고예방

● 제도개선

- 관계 심의위원회의 역할 강화

- 자전거 보험 및 등록제 도입

- 자전거 이용시설 설치 민간업자의 재정지원

- 자전거 이용 저해 행위에 대한 지속적 단속

8. 단계별 투자계획

● 사업우선순위 선정방법

-「인천광역시 자전거 이용시설 기본계획 재정비」상 자전거도로 설치

계획년도 고려하여 자전거도로의 연계성이 확보될 수 있도록 단계별

투자계획 수립

● 단계별 사업추진계획

1) 자전거도로

구 분	1단계 (2012년)	2단계 (2013년)	3단계 (2014년)	4단계 (2015년)	5단계 (2016년)	합 계
연장(km)	3.68	3.23	4.06	4.78	2.31	18.06
노선수	5	4	7	6	5	27
사업비용(억원)	9.01	7.91	9.93	11.71	5.67	44.23

2) 기타 부대시설 및 활성화 사업

구 분		1단계 (2012년)	2단계 (2013년)	3단계 (2014년)	4단계 (2015년)	5단계 (2016년)	합 계
합 계		3.98	1.22	1.17	1.10	1.23	8.70
자전거보관소 확 충	개소(개)	20(200)	6(60)	5(50)	3(30)	7(70)	41(410)
	사업비용 (억원)	0.60	0.18	0.15	0.09	0.21	1.23
공기주입기 확 충	개소(개)	11(14)	7(8)	4(4)	1(1)	3(4)	26(31)
	사업비용 (억원)	0.07	0.04	0.02	0.01	0.02	0.16
자전거 교육시설 구축 및 운영	사업비용 (억원)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	2.50
홈페이지 구축 및 관리	사업비용 (억원)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	2.50
산악자전거 도로정비/구축	사업비용 (억원)	2.31	-	-	-	-	2.31

3) 종  합

구 분	1단계 (2012년)	2단계 (2013년)	3단계 (2014년)	4단계 (2015년)	5단계 (2016년)	합 계
단계별 총 사업비(억원)	12.99	9.13	11.10	12.81	6.90	52.93